횡성군 고시 제2019  181호

농업생산기반 정비사업(개간) 시행계획 변경 승인․고시

횡성군 공근면 공근리 산65-12번지 1필지 일원의 공근지구 농업생산기반 정비사업(개간)에 대하여「농어촌정비법」제9조제1항 및「농어촌정비법」제9조제7항 규정에 따라 시행계획 변경 승인 및 고시하고 같은법 제105조 및「토지이용규제 기본법」제8조제2항의 규정에 따라 지형도면을 변경승인․고시합니다.

2019년  08월  13일

횡 성 군 수

1. 사 업 목 적 : 농작물 재배를 위한 농업생산기반정비사업(개간) 변경시행

2. 사업지구명 : 공근면 공근지구

3. 명      칭 : 농업생산기반 정비사업(개간) 시행계획 변경 승인․고시

4. 위      치 : 강원도 횡성군 공근면 공근리 산65-12

5. 사업시행자 : 강원도 횡성군 횡성읍 입석로 44 정◯철

6. 사업시행면적

지적면적  16,729㎡   수혜면적  4,930㎡

7. 개간 대상지 선정 : 2016.  11.  28.

8. 사업개요(예상 감보율 포함)

○ 개간대상 면적 : 4,930㎡

○ 재배작물 : 과수(사과)

9. 총 사 업 비 : 269,872천원

10. 사 업 기 간 : 당초 : 2017. 01. 12. ∼ 2019. 07. 30.

변경 : 2017. 01. 12. ∼ 2019. 11. 30.

※변경사유 : 공사내용 변경에 따른 공기부족으로 사업기간 변경

11. 농업생산기반 정비사업(개간) 시행계획 변경승인 고시 도․서 : 실음생략

12. 기타 자세한 사항은 횡성군 안전건설과로 문의(☏033-340-2485)하여 주시기 바랍니다.