경산시 고시 제2020-221호

경산 도시계획사업(중산 제1지구 시가지조성사업)

실시계획(변경) 인가 고시

경산 도시계획사업(중산제1지구 시가지조성사업)에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 부칙 제22조, 「舊 도시계획법」 제25조, 제26조 및 같은 법 시행령 제26조, 제27조의 규정에 따라 실시계획(변경) 인가하고 다음과 같이 고시합니다.

2020년   11월   9일

경  산  시  장

1. 사업시행지의 위치 (변경없음) : 경산시 중산동 1번지 일원

2. 사업의 종류 및 명칭 (변경없음)

◦ 종   류 : 시가지조성사업

◦ 명   칭 : 경산 중산 제1지구 시가지조성사업

3. 사업의 면적 또는 규모 (변경없음)

◦ 시가지조성사업 결정면적 : 805,556.3㎡

◦ 사업시행면적

구분	합계	면 적(㎡)								비 고
		1단계 (사업완료)	2단계
			소계	Ⅰ단계 (사업완료)	Ⅱ단계				Ⅲ단계
					소계	A공구	B공구	C공구
기정	805,556.3	99,065.0	706,491.3	387,068.3	213,109.0	192,717.0	13,955.0	6,437.0	106,314.0

4. 사업시행자의 성명 ․ 주소 (변경없음)

성 명	주 소	비 고
대한토지신탁(주) 대표이사 이훈복	서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)	1단계(기시행), 2-Ⅰ단계(기시행), 2-Ⅱ단계 A공구, C공구, 2-Ⅲ단계
사회복지법인 운경복지재단 이사장 곽동환	경산시 조영1길 16-4, 501호(조영동)	2-Ⅱ단계 B공구

5. 사업의 착수 및 준공예정일 (변경있음)

◦ 착 수 년 월 일 : 실시계획인가일 (2001. 12. 31)

◦ 준공예정년월일

구 분		1단계 (기시행)	2단계					비 고
			2-Ⅰ단계 (기시행)	2-Ⅱ단계			2-Ⅲ단계
				A공구	B공구	C공구
사업기간	기정	실시계획인가일 ~2005.10.31	실시계획인가일 ~2017.08.14	2020.12.31	2020.12.31	2020.12.31	2021.03.31
	변경			2021.06.30. (6개월연장)	2021.12.31. (12개월연장)	2021.12.31. (12개월연장)	2022.03.31. (12개월연장)
※ 대지조성공사 지연 및 지적확정측량 등의 행정절차 이행에 따른 사업기간 연장

6. 실시계획(변경)인가 사유

◦ 대지조성공사 지연 및 2-Ⅱ단계 A공구 지적확정측량 등 행정절차 이행의 절대공기 부족에 따른 사업기간 연장

7. 수용 또는 사용할 토지․건물의 소재지․지번․지목 및 소유권 이외의 권리의 명세 (변경없음) : 게재생략

8.「舊 도시계획법」제83조 규정에 의한 공공시설 등의 귀속 및 양도에 관한 사항 (변경없음) : 게재생략

9. 관계도서는 경산시청 도시과(☎053-810-5512)에 비치하여 일반인에게 보입니다.